Expediente: 2023/96

DON GABRIEL AMAT AYLLÓN, PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL PONIENTE ALMERIENSE, HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
<DEC_GEN>

I. ANTECEDENTES. ACTUACIONES A REALIZAR
1.	Con fecha 10 de mayo de 2023, HIDRALIA presenta escrito exponiendo una serie de actuaciones indispensables para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones que presentan en el anexo y que se resumen a continuación:

a.	Instalación de Media Tensión en C.T. (Actuación Nº 50).
i.	Precio Total: 36.976,50 €
b.	Instalación de Baja Tensión en cuadro general de protecciones. (Actuación Nº 51).
i.	Precio Total: 17.287,60 €
c.	Sustitución de Interruptor de Protección de Acometida Eléctrica a CCM4. (Actuación Nº 52).
i.	Precio Total: 36.555,85 €
d.	Protección General de CCM4. (Actuación Nº 53).
i.	Precio Total: 22.980,55 €
e.	Batería de Condensadores para la corrección de la energía reactiva. (Actuación Nº 54).
i.	36.867,14 €
Importe total de las actuaciones 50,51,52,53 y 54: 150.667,64 €
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitan que cada una de las actuaciones descritas sean incluidas dentro de las inversiones del REMANENTE DE TESORERÍA del C.I.A.P. Presentan informe justificativo y presupuestos de reparación.
2.	Con fecha 12 de junio de 2023, HIDRALIA presenta escrito exponiendo que se han finalizado las pruebas referentes a la revisión de las líneas eléctricas de cara a las nuevas instalaciones que se están llevando a cabo. Por consiguiente, adjuntan escritos informativos junto con sus anexos correspondientes:

a.	Escrito anterior de actuaciones a realizar necesarias para soportar el aumento de potencia previsto. (Anexo I. Punto Nº 1 de I. ANTECEDENTES).

b.	Informe de la empresa especializada justificativo junto con el presupuesto. (Anexo II. INFORME TÉCNICO DE LAS CABINAS DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN).
Exponen que, tras comprobar la antigüedad, tanto de las celdas de los transformadores como de la de distribución, y de realizar las pruebas pertinentes se ha resuelto que dichas cabinas para la inminente puesta en marcha del terciario y el bombeo deben ser reemplazadas urgentemente tanto por riesgo operativo como personal. (Cabinas de MT instaladas en el Centro de Transformación de la E.D.A.R. conectadas a la tensión de red de 20 KV).  Esta justificación se plasma en el ANEXO II (Punto b del presente epígrafe). 
a.	Cabinas de protección y medida para Centro de Transformación e Instalación de Grupos Electrógenos provisionales para E.D.A.R de Roquetas de Mar.
i.	Precio Total: 97.651,56 €
Además, se indica que para llevar esta actuación es necesario la desconexión de la planta a la línea de suministro eléctrico, por lo que es necesario el alquiler de grupos electrógenos de gran capacidad y potencia que provean de energía eléctrica para dichos trabajos.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitan aprobación para acometer con urgencia, tanto esta actuación como las descritas en el Punto Nº 1. De I. ANTECEDENTES. por un importe total de 248.229,17 € cuya amortización anual será repercutida con cargo a la tarifa de agua regenerada propuesta.
3.	Con fecha 6 de Julio de 2023, HIDRALIA presenta escrito solicitando aprobación por parte del C.I.A.P. para repercutir la amortización anual en las tarifas del Sistema Terciario. Por consiguiente, adjuntan una memoria económica inicial y un informe de adjudicación según procedimiento interno.

AMORTIZACIÓN	VALOR TOTAL	% APLICACIÓN	IMPORTE TOTAL	
REFUERZO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	223.639,00 €	12,00 %	26.837 €	

i.	Anexo I. Memoria Económica.
a.	ACTUACIONES DE REFUERZO DE LÍNEA ELÉCTRICA DE LA E.D.A.R. DE ROQUETAS DE MAR PARA LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO TERCIARIO Y BOMBEO ANEXO.

Descripción de las actuaciones de carácter indispensable a realizar en la línea eléctrica de la E.D.A.R. de Roquetas de Mar con objeto de suministrar energía eléctrica con garantía a las nuevas instalaciones de tratamiento terciario de la E.D.A.R. así como el bombeo de agua regenerada anexo. (Puntos 1 y 2 correspondientes a I. ANTECEDENTES).

ii.	Anexo II. Informe Adjudicación.
a.	PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. REFUERZO LÍNEA ELÉCTRICA DE LA E.D.A.R. DE ROQUETAS DE MAR.

La empresa HIDRALIA S.A. ha realizado diferentes pruebas, ensayos y análisis a través de empresas especializadas en el sector con el objeto de conocer los refuerzos necesarios a realizar en la instalación eléctrica descrita de la planta para poder conectar a la misma los nuevos equipos de tratamiento y evacuación de agua regenerada.

El objeto de este estudio es seleccionar la empresa que presente mejor propuesta en base a criterios económicos.

Se han aportado tres (3) proposiciones presentadas de tres (3) empresas:

 •	FRANCISCO JAVIERE FERRER TORRES. (287.370,60 €, IVA EXCLUIDO).
 •	IMSEAL ELECTRALIA S.L. (242.453,86 €, IVA EXCLUIDO).
 •	INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS DE ALHAMA DE ALMERÍA S.L.U. (223.639,01 €, IVA EXCLUIDO).

Se evalúa mediante el criterio de mayor baja ejecutada en porcentaje, asignándose 70 puntos a la mayor baja realizada.

Valoración (i)= 70 x [1 – [(Pi – Pmin)/Pmax]]

EMPRESA	PUNTOS	
FRANCISCO JAVIERE FERRER TORRES	54,50	
IMSEAL ELECTRALIA S.L.	65,40	
INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS DE ALHAMA DE ALMERÍA S.L.U.	70,00	

Por tanto, los resultados de la evaluación concluyen que la empresa adjudicataria sea INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS DE ALHAMA DE ALMERÍA S.L.U. por haber presentado la mejor oferta para la realización del “REFUERZO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE LA E.D.A.R. DE ROQUETAS DE MAR”.

4.	En el estudio técnico económico de los costes del tratamiento terciario (Microfiltración y ultravioleta) e impulsión de agua regenerada, aparece recogido en el apartado 4.1.6 gastos de amortización la inversión inicial necesaria para el refuerzo de la línea eléctrica de la planta que permita la ampliación de potencia contratada, así como lo garantía de continuidad en el suministro eléctrico. El refuerzo de la citada instalación contemplado inicialmente en 248.229 €, ha de ser objeto de reajuste a la mejor oferta recibida por la empresa operadora que asciende como se ha indicado a 223.639,01 € IVA excluido.
Se ha contrastado si la referida inversión pudiera ser objeto de incorporación a las obras de emergencia que esta ejecutando la Junta de Andalucía con motivo de la sequía habiendo sido infructuosas las gestiones debido a la limitación presupuestarias que tienen las referidas obras, por lo que solo cabo reconocer entre los costes de amortización a repercutir en la prestación patrimonial no tributaria correspondiente al terciario, la actuación reseñada.
Por cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas se autoriza:

ÚNICO.- Que por parte de la empresa operadora se proceda a la ejecución de las actuaciones eléctricas necesarias para la adaptación a la nueva potencia instalada en la EDAR de Roqueta cuyo coste será objeto de repercusión como gasto de amortización en la prestación patrimonial no tributaria del terciario por un valor máximo de 223.639,01 € IVA excluido con una amortización contable de estas instalaciones de un plazo de 8 años desde el inicio de la prestación del suministro de aguas regeneradas.
</DEC_GEN>

La presente resolución ha sido firmada electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la autoridad competente y transcrita al Libro de Resoluciones por la secretaría municipal con el número y fecha al margen reseñado, como garantía de autenticidad e integridad.